2016년 템플스테이 시설지원사업 감리 지침

1. 템플스테이 시설지원사업

▪ 진행 흐름도

① 기본 설계	➡	② 보조금 교부 신청서 제출	➡	③ 교부결정 통보	➡	④ 설계 및 인허가 완료 공사업체 선정
		해당사찰→사업단		사업단→해당사찰
						□
⑧ 정산보고	□	⑦ 완공보고 / 현장실사	□	⑥ 중간보고 / 현장실사	□	⑤ 착공보고 / 현장실사
해당사찰→사업단		사업단↔해당사찰		해당사찰↔사업단		해당사찰↔사업단

2. 사업 진행상황

▪ 위 사업흐름 중 ③, ④에 해당하며, 현재 사찰에서 실시설계 및 세부 내역산출, 건축 인·허가 진행이 이루어지고 있음

▪ 설계업체는 사찰 수의계약, 공사업체는 각 교구본사 불사자문위원회에서 선정

3. 감리 계약

▪ 사찰별 감리비는 비상주감리 기본요율(사업비의 2.5%) 내·외에서 별도로 책정함

▪ 사업단에서 지정 감리업체 선정 후 각 사찰에 통보, 개별 계약 진행

4. 감리업무 수행 지침

사업 진행	내용
착공 보고	- 감리업무 착수보고 - 공사 착공계 제출 시 착공 내역 확인 및 승인 - 현장소장(대리인) 임명 및 배치 확인 - 선급금 지급액 검토
중간 보고	- 기성금 신청 시 기성금 내역 확인 및 승인 - 중간 감리보고서 제출
완공 보고	- 완공계 제출 시 완공 내역 확인 및 승인 - 건축법규 준수 확인 - 준공 인·허가(사용승인, 건축물대장 등) 진행 - 최종 감리보고서 제출
기타	- 각 중요 공정별 재료 반출·입 내역 확인/기록 - 설계변경 시 변경 내역 확인 - 사업 단계별 현장실사 동행(사업단 실사팀)